Przedmiar robót

Przebudowa ulicy Piaskowej w Łomiankach

Lp.	Podstawa
ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar	

1. Prace przygotowawcze

1	2	3	4	5	
 1	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 10101-010-020	Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni. Średnice drzew 10-15 cm
Charakterystyka Robót: Tablica: 0101
 1.Ścięcie drzewa lub odcięcie dłużycy od pnia oraz obcięcie wierzchołka
   i gałęzi
 2.Odciągnięcie gałęzi i ułożenie w stosy
 3.Przetoczenie dłużycy i ułożenie na podkładach
 4.Odrąbanie korzeni
 5.Wydobycie pnia spycharką z przemieszczeniem
 6.Ułożenie w stosy
 7.Zasypanie dołu
krotność= 1,00

	szt	12,00
	
2	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 10105-010-020	Ręczne karczowanie drzew o średnicy 10-15 cm
Charakterystyka Robót: Tablica: 0105
 1.Przymocowanie linki odciągającej
 2.Odkopanie pnia i odrąbanie korzeni
 3.Przewrócenie drzewa
 4.Ocięcie dłużycy od pnia oraz obcięcie wierzchołka i gałęzi
 5.Odciągnięcie gałęzi oraz pnia i korzeni i ułożenie w stosy
 6.Przetoczenie dłużycy i ułożenie jej na podkładach
 7.Zasypanie dołu
 8.Zdjęcie i zwinięcie linki odciągającej
krotność= 1,00

	szt	12,00
	
3	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 10101-020-020	Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni. Średnice drzew 16-25 cm
Charakterystyka Robót: Tablica: 0101
 1.Ścięcie drzewa lub odcięcie dłużycy od pnia oraz obcięcie wierzchołka
   i gałęzi
 2.Odciągnięcie gałęzi i ułożenie w stosy
 3.Przetoczenie dłużycy i ułożenie na podkładach
 4.Odrąbanie korzeni
 5.Wydobycie pnia spycharką z przemieszczeniem
 6.Ułożenie w stosy
 7.Zasypanie dołu
krotność= 1,00

	szt	16,00
	
4	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 10105-020-020	Ręczne karczowanie drzew o średnicy 16-25 cm
Charakterystyka Robót: Tablica: 0105
 1.Przymocowanie linki odciągającej
 2.Odkopanie pnia i odrąbanie korzeni
 3.Przewrócenie drzewa
 4.Ocięcie dłużycy od pnia oraz obcięcie wierzchołka i gałęzi
 5.Odciągnięcie gałęzi oraz pnia i korzeni i ułożenie w stosy
 6.Przetoczenie dłużycy i ułożenie jej na podkładach
 7.Zasypanie dołu
 8.Zdjęcie i zwinięcie linki odciągającej
krotność= 1,00

	szt	16,00
	
5	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 10107-010-164	Wywożenie dłużyc na odległość do 2 km
Charakterystyka Robót: Tablica: 0107
 1.Załadownie dłużyc, karpiny drągowiny i gałęzi
 2.Przewiezienie na odległość do 2 km i wyładowanie
 3.Przeniesienie i ułożenie dłużyc na legarach, a karpiny, drągowiny i gałęzi -
   w stosy na wskazanym miejscu
krotność= 1,00

	m-p	3,50
	
6	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 10107-030-164	Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km
Charakterystyka Robót: Tablica: 0107
 1.Załadownie dłużyc, karpiny drągowiny i gałęzi
 2.Przewiezienie na odległość do 2 km i wyładowanie
 3.Przeniesienie i ułożenie dłużyc na legarach, a karpiny, drągowiny i gałęzi -
   w stosy na wskazanym miejscu
krotność= 1,00

	m-p	4,00
	
7	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 10110-010-164	Usuniecie i spalenie pozostałości po karczunku. Drągowina, karcze, gałęzie i resztki z drzew bez względu na średnice
Charakterystyka Robót: Tablica: 0110
 1.Załadowanie drągowiny, karczy, gałęzi i resztek
 2.Przewiezienie do miejsca spalenia i rozładowanie
 3.Ułożenie na legarach drągowiny, karczy, gałęzi i resztek
 4.Polanie stosu ropą i podpalenie
 5.Dokładanie do ognia i cał kowite spalenie
krotność= 1,00

	m-p	0,50
	
8	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 10111-010-043	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym
Charakterystyka Robót: Tablica: 0111
 1.Sprawdzenie i uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami
 2.Niwelacja kontrolna reperów i osi trasy
 3.Zabezpieczenie osi trasy przez wyniesienie jej poza obręb robót
 Uwaga:
   Nakłady robocizny obejmują tyko prace pomocnicze (robotników) przy pomiarze.
krotność= 1,00

	km	0,60
	
9	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 60802-020-050	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia o grubości 15 cm
Charakterystyka Robót: Tablica: 0802
 1.Ręczne lub mechaniczne wyłamanie nawierzchni
 2.Odrzucenie gruzu (materiału) na pobocze z ułożeniem w stosy
 Uwaga:
       Nakłady korygować proporcjonalnie do grubości nawierzchni.
krotność= 1,00

	m2	2 376,00
	
10	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-311510-0401-034	Transport wewnętrzny materiałów pojazdami samowyładowczymi na odległość do 0,5 km. Załadunek mechaniczny kruszywa naturalnego. Samochód samowyładowczy do 5 t
Charakterystyka Robót: Tablica: 1510
 1.Załadunek materiałów
 2.Przewóz na odległość do 0,5 km
 3.Wyładowanie materiałów przez przechylenie skrzyni ładownej
 4.Powrót do miejsca załadunku
 5.Manewrowanie pojazdem w miejscu załadunku i wyładunku
krotność= 1,00

	t	570,00
	
11	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-311511-02-034	Dodatek do tablicy 1510 za transport materiałów samochodami samowyładowczymi do 5 t na dalsze 0,5 km ponad 0,5 km
krotność= 1,00

	t	570,00

2. Budowa kanalizacji deszczowej rozsączającej

1	2	3	4	5	
 12	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 10210-020-060	Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m3, głębokość wykopu do 3,00m. Grunt kategorii I-II
Charakterystyka Robót: Tablica: 0210
 1.Odspojenie gruntu koparką z umieszczeniem urobku poza górną krawędzią wykopu
 2.Ręczne wykonanie i utrzymanie tymczasowych rowków odwadniających w  wykopie
 3.Ręczne wyrównanie z grubsza korony, dna i skarp wykopu oraz odkładu
krotność= 1,00

	m3	275,00
	
13	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 10412-010-060	Wykonanie złoża filtracyjnego ze żwiru sortowanego o granulacji 2 - 8mm
Charakterystyka Robót: Tablica: 0412
 1.Dostarczenie materiałów do miejsca wbudowania
 2.Rozścielenie i wyrównanie warstwy filtracyjnej z tłucznia lub mieszanki
   żwirowo-piaskowej na uprzednio przygotowanym dnie zbiornika
 3.Wykonanie mieszanki żwirowo-piaskowej
krotność= 1,00

	m3	226,00
	
14	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 41414-010-020	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych wysokości 500 mm,średnicy 1000 mm o głębokości 3 m wykonywane metodą studniarską w gruntach kategorii I-II
Charakterystyka Robót: Tablica: 1414
 1.Ust awianie kręgów, stopniowe opuszczanie w miarę pogłębiania studni
 2.Odspojenie i wydobycie gruntu, składowanie na odkład
 3.Ułożenie warstwy tłucznia 15 cm na dnie studni
 4.Zabetonowanie dna studni z wyrobieniem kanalika przepływowego
 5.Wykucie otworów w krę gu dla wprowadzenia przewodów rurowych
 6.Obrobienie wlotów przewodów rurowych
 7.Osadzenie stopni włazowych
 8.Wyprawienie styków kręgowych zaprawą
krotność= 1,00

	szt	8,00
	
15	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 40227-050-020	Włazy kanałowe żeliwne, okrągłe typu ciężkiego
Charakterystyka Robót: Tablica: 0227
 Dla kol.01-03:
 1.Ustawienie pokrywy nadstudziennej żelbetowej
 Dla kol.04-05:
 1.O sadzenie włazu na zaprawie cementowej
krotność= 1,00

	szt	8,00
	
16	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 41308-040-040	Kanały rozsączające z rur LP D=300mm łączone na wcisk
Charakterystyka Robót: Tablica: 1308
 1.Wyrównanie dna wykopu
 2.Opuszczenie rur do wykopu
 3.Ułożenie rur z przycięciem
 4.Sprawdzenie i wyregulowanie niwelety
 5.Wykonanie dołków montażowych
 6.Wykonanie połączenia rur
krotność= 1,00

	m	453,00
	
17	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 41417-022-020	Wpust polietylenowy z kratą żeliwną
Charakterystyka Robót: Tablica: 1417
 1.Wykonanie podsypki z pospółki
 2.Ustawienie kinety
 3.Montaż trzonu studzienki z rury karbowanej
 4.Montaż rury teleskopowej zwężki lub ustawienie stożka betonow ego
 5.Założenie pokrywy lub wpustu
 Uwaga:
   Nakłady materiałowe w poz.23 Trzon studzienki, rura karbowana określa się
   wg długości rury, podanej w dokumentacji projektowej
krotność= 1,00

	szt	23,00
	
18	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 41308-020-040	Kanały z rur PVC. Rurociągi PVC o średnicy zewnętrznej 160 mm,łączone na wcisk
Charakterystyka Robót: Tablica: 1308
 1.Wyrównanie dna wykopu
 2.Opuszczenie rur do wykopu
 3.Ułożenie rur z przycięciem
 4.Sprawdzenie i wyregulowanie niwelety
 5.Wykonanie dołków montażowych
 6.Wykonanie połączenia rur
krotność= 1,00

	m	69,00
	
19	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 10214-05010-060	Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych,punktowych,obiektowych,rowów spycharkami 74 kW. Zagęszczanie ubijakami warstwy luźnej grub.25 cm. Grunt kat.III-IV
Charakterystyka Robót: Tablica: 0214
 1.Przemieszczenie z zasypaniem mas ziemnych uprzednio odspojonych spycharkami
 2.Zagęszczenie uprzednio zasypywanych wykopów warstwami
 3.Zwilżenie wodą w miarę potrzeby warstwy zagęszczanej
 Uwaga:
   Nakłady podane w lp.73 objemują dwa walce
krotność= 1,00

	m3	163,00

3. Wykonanie podbudowy i nawierzchni

1	2	3	4	5	
 20	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-310101-01-050	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Głębokość 20 cm. Kategoria gruntu I-IV
Charakterystyka Robót: Tablica: 0101
 1.Odspojenie gruntu ze złożeniem urobku na odkład lub na hałdę
 2.Profilowanie dna koryta z mechanicznym zagęszczeniem
 3.Uformowanie poboczy z wyrównaniem do wymaganego profilu
 4.Mechaniczne zagęszczenie poboczy
krotność= 1,00

	m2	3 168,00

21	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 10514-010-050	Umocnienie skarpy  płytami prefabrykowanymi 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0514
 1.Dostarczenie materiałów
 2.Wykonanie podsypki
 3.Ułożenie płyt z wypełnieniem od spodu szczelin między płytami zaprawą
   cementową
 4.Zalan ie z góry przerw między płytami Bitizolem
 5.Obcięcie uchwytów transportowych
krotność= 1,00

	m2	56,00
	
22	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-311510-0401-034	Transport wewnętrzny materiałów pojazdami samowyładowczymi na odległość do 0,5 km. Załadunek mechaniczny kruszywa naturalnego. Samochód samowyładowczy do 5 t
Charakterystyka Robót: Tablica: 1510
 1.Załadunek materiałów
 2.Przewóz na odległość do 0,5 km
 3.Wyładowanie materiałów przez przechylenie skrzyni ładownej
 4.Powrót do miejsca załadunku
 5.Manewrowanie pojazdem w miejscu załadunku i wyładunku
krotność= 1,00

	t	1 470,00
	
23	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-311511-02-034	Dodatek do tablicy 1510 za transport materiałów samochodami samowyładowczymi do 5 t na dalsze 0,5 km ponad 0,5 km
krotność= 1,00

	t	1 470,00
	
24	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 10214-010-060	Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych,punktowych,obiektowych,rowów spycharkami 55kW. Zagęszczanie spycharkami warstwy luźnej grub.30 cm. Grunt kat.I-II (wymiana gruntu)
Charakterystyka Robót: Tablica: 0214
 1.Przemieszczenie z zasypaniem mas ziemnych uprzednio odspojonych spycharkami
 2.Zagęszczenie uprzednio zasypywanych wykopów warstwami
 3.Zwilżenie wodą w miarę potrzeby warstwy zagęszczanej
 Uwaga:
   Nakłady podane w lp.73 objemują dwa walce
krotność= 1,00

	m3	364,00
	
25	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-310104-05-050	Warstwa odsączająca w korycie lub na całej szerokości drogi. Zagęszczanie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm
Charakterystyka Robót: Tablica: 0104
 1.Uzupełniające wyrównanie podłoża
 2.Rozścielenie piasku warstwami zgodnie z projektem
 3.Wyrównanie powierzchni do wymaganego profilu
 4.Zagęszczenie warstwy piasku ręcznie lub mechanicznie z polewaniem wodą
krotność= 1,00

	m2	3 640,00
	
26	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-310104-08-050	Warstwa odsączająca w korycie lub na całej szerokości drogi. Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne. Dodatek za każdy dalszy 1 cm
Charakterystyka Robót: Tablica: 0104
 1.Uzupełniające wyrównanie podłoża
 2.Rozścielenie piasku warstwami zgodnie z projektem
 3.Wyrównanie powierzchni do wymaganego profilu
 4.Zagęszczenie warstwy piasku ręcznie lub mechanicznie z polewaniem wodą
krotność= 1,00

	m2	3 640,00
	
27	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 60403-030-040	Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm,wraz z wykonaniem ław betonowych,na podsypce cementowo-piaskowej
Charakterystyka Robót: Tablica: 0403
 1.Wyznaczenie osi wykopu
 2.Wyrównanie dna i ścian wykopu
 3.Wykonanie ławy z materiałów sypkich z ręcznym ubiciem (kol.01 - 02)
 4.Przygotowanie i ustawienie deskowania dla ław betonowych w uprzednio
   wykopanym i wyrównanym wykopie
 5.Ręczne rozścielenie, wyrównanie i ubicie mieszanki betonowej dla ław
   betonowych
 6.Rozebranie deskowania
 7.Pielęgnacja ław betonowych przez polewanie wodą
 8.Rozścielenie posypki piaskowej (kol.01 - 02)
 9.Przygotowanie podsypki cementowo-piaskowej z jej rozścieleniem
 10.Ustawienie kra wężnika i wyregulowanie według osi poziomych i podanych
    punktów wysokościowych
 11.Wypełnienie spoin zaprawą cementową z przygotowaniem zaprawy
 12.Zasypanie zewnętrznej ściany krawężnika ziemią i ubicie
krotność= 1,00

	m	1 060,00
	
28	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 60401-010-040	Krawężniki betonowe bez ław,wystające o wymiarach 15x30 cm,na podsypce piaskowej
Charakterystyka Robót: Tablica: 0401
 1.Rozścielenie podsypki piaskowej
 2.Przygotowanie podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej rozścieleniem
 3.Ustawienie krawężnika i wyregulowanie według osi poziomych i podan ych
   punktów wysokościowych
 4.Wypełnienie spoin zaprawą cementową z przygotowaniem zaprawy
 5.Zasypanie zewnętrznej ściany krawężnika ziemią i ubicie
krotność= 1,00

	m	244,00
	
29	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 60404-050-040	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm,na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane zaprawą cementową
Charakterystyka Robót: Tablica: 0404
 1.Rozścielenie podsypki piaskowej
 2.Przygotowanie podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej rozścieleniem
 3.Ustawienie obrzeży
 4.Wyregulowanie według osi poziomych i podanych punktów wysokościowych
 5.Oczyszczenie i wypełnienie spoin piaskiem lub zaprawą cementową wraz
   z jej przygotowaniem
 6.Obsypanie zewnętrznej ściany obrzeży ziemią wraz z jej ubiciem
krotność= 1,00

	m	509,00
	
30	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 60113-020-050	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego,grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm
Charakterystyka Robót: Tablica: 0113
 1.Mechaniczn e rozścielenie dolnej warstwy kruszywa
 2.Ręczne odrzucenie nadziarna
 3.Zagęszczenie warstwy dolnej
 4.Mechaniczne rozścielenie górnej warstwy kruszywa
 5.Zagęszczenie i profilowanie warstwy górnej z nawilżaniem wodą
 6.Posypanie górnej warstwy miałem kamienny m
krotność= 1,00

	m2	3 335,00
	
31	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 60502-03010-050	Chodniki z kostki brukowej (wjazdy do posesji) betonowej grubości 8 cm,kolorowej,układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełnianepiaskiem
Charakterystyka Robót: Tablica: 0502
 1.Wyprofilowanie i zagęszczenie podłoża
 2.Rozmieszczenie na wyprofilowanym podłożu podsypki piaskowej grub.4 cm lub
   podsypki cementowo-piaskowej grub.4 cm wraz z jej przygotowaniem
 3.Zagęszczenie podsypki wibratorem
 4.Wyrównanie warstwy podsypkowej szablonami
 5.Ułożenie kostki brukowej z przycięciem na krawędziach
 6.Ubicie kostki wibratorem
 7.Wymiana kostek popękanych przy  ubijaniu
 8.Wypełnienie spoin piaskiem z uprzednim jego przesianiem
krotność= 1,00

	m2	490,00
	
32	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 60502-020-050	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm,szarej,układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem
Charakterystyka Robót: Tablica: 0502
 1.Wyprofilowanie i zagęszczenie podłoża
 2.Rozmieszczenie na wyprofilowanym podłożu podsypki piaskowej grub.4 cm lub
   podsypki cementowo-piaskowej grub.4 cm wraz z jej przygotowaniem
 3.Zagęszczenie podsypki wibratorem
 4.Wyrównanie warstwy podsypkowej szablonami
 5.Ułożenie kostki brukowej z przycięciem na krawędziach
 6.Ubicie kostki wibratorem
 7.Wymiana kostek popękanych przy  ubijaniu
 8.Wypełnienie spoin piaskiem z uprzednim jego przesianiem
krotność= 1,00

	m2	556,00
	
33	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 60502-03010-050	Chodniki z kostki brukowej (pas jezdny)  betonowej grubości 8 cm,szarej układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełnianepiaskiem
Charakterystyka Robót: Tablica: 0502
 1.Wyprofilowanie i zagęszczenie podłoża
 2.Rozmieszczenie na wyprofilowanym podłożu podsypki piaskowej grub.4 cm lub
   podsypki cementowo-piaskowej grub.4 cm wraz z jej przygotowaniem
 3.Zagęszczenie podsypki wibratorem
 4.Wyrównanie warstwy podsypkowej szablonami
 5.Ułożenie kostki brukowej z przycięciem na krawędziach
 6.Ubicie kostki wibratorem
 7.Wymiana kostek popękanych przy  ubijaniu
 8.Wypełnienie spoin piaskiem z uprzednim jego przesianiem
krotność= 1,00

	m2	2 412,00

4. Prace wykończeniowe

1	2	3	4	5	
 34	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 61305-020-060	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych,objętość betonu w jednym miejscu od 0,1 do 0,2 m3
Charakterystyka Robót: Tablica: 1305
 Dla kol. 01-03:
 1.Zdjęcie przykrycia urządzenia podzi emnego
 2.Odkucie i rozebranie uszkodzonej nawierzchni i podbudowy oraz górnej części
   uszkodzonej studzienki
 3.Zebranie i odrzucenie gruzu na pobocze (chodniki)
 4.Wykonanie deskowania
 5.Ułożenie i zagęszczenie mieszanki betonowej
 6.Rozebranie deskowania
 7.Osadzenie przykrycia na zaprawie cementowej wraz z jej przygotowaniem
 Dla kol. 04-07:
 1.Ręczne rozkucie uszkodzonego betonu
 2.Oczyszczenie i nawilżenie wodą naprawianego miejsca
 3.Przygotowanie, ustawienie i rozebranie deskowania oraz konstrukcji
   podtrz ymującej
 4.Wbudowanie mieszanki betonowej wraz z zagęszczeniem i wyrównaniem
   powierzchni
 5.Pielęgnacja betonu
 6.Zatarcie na gładko powierzchni po rozebraniu deskowania
 7.Odrzucenie gruzu na pobocze wraz z ułożeniem w pryzmy
krotność= 1,00

	m3	1,30
	
35	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 61305-040-060	Naprawy urządzeń z betonu,objętość betonu w jednym miejscu do 0,3 m3
Charakterystyka Robót: Tablica: 1305
 Dla kol. 01-03:
 1.Zdjęcie przykrycia urządzenia podzi emnego
 2.Odkucie i rozebranie uszkodzonej nawierzchni i podbudowy oraz górnej części
   uszkodzonej studzienki
 3.Zebranie i odrzucenie gruzu na pobocze (chodniki)
 4.Wykonanie deskowania
 5.Ułożenie i zagęszczenie mieszanki betonowej
 6.Rozebranie deskowania
 7.Osadzenie przykrycia na zaprawie cementowej wraz z jej przygotowaniem
 Dla kol. 04-07:
 1.Ręczne rozkucie uszkodzonego betonu
 2.Oczyszczenie i nawilżenie wodą naprawianego miejsca
 3.Przygotowanie, ustawienie i rozebranie deskowania oraz konstrukcji
   podtrz ymującej
 4.Wbudowanie mieszanki betonowej wraz z zagęszczeniem i wyrównaniem
   powierzchni
 5.Pielęgnacja betonu
 6.Zatarcie na gładko powierzchni po rozebraniu deskowania
 7.Odrzucenie gruzu na pobocze wraz z ułożeniem w pryzmy
krotność= 1,00

	m3	1,30
	
36	wg nakładów
rzeczowych
KSNR  60702-06-020	Pionowe znaki drogowe,drogowskazy jednoramienne o powierzchni do 0,3 m2
krotność= 1,00

	szt	21,00